『2022 노원달빛산책』(구 노원등(燈)축제)

등(燈) 콘텐츠 전시 용역 과업지시서

재단법인 노원문화재단

Ⅰ		과업개요

1. 과업목적

가. 「2022 노원달빛산책」(구 노원등(燈)축제)(이하 “노원달빛산책” 이라 함)행사의  성공적인 개최 및 안정적인 운영 도모

나. 「2022 노원달빛산책」 주제에 맞는 등(燈) 콘텐츠의 완성도 높은 전시

2. 과 업 명: 「2022 노원달빛산책」(구 노원등(燈)축제) 등(燈) 콘텐츠 전시

※ 주제 : ‘은하수를 건너서’(가제)

3. 과업기간: 계약일로부터 ~ 2022. 11. 11.(철거 및 원상복구까지)

4. 세부 추진 일정

구분	설치 및 점검 (현장합동점검)	시범 점등 기간	행사 기간	철거 및 원상복구
일정	2022.09.26.(월) ~ 2022.10.5.(수)	2022.10.6.(목) [17:00~20:00]	2022.10.7.(금) ~ 2022.10.30.(일) [18:00~22:00]	2022.10.31.(월) ~ 2022.11.11.(금)

※ 진행 상황에 따라 일정은 일부 변동될 수 있으며, 재단과 구청의 요청이 있을 시,   이를 반드시 수행하여야 한다.

5. 과업범위

가. ‘달빛산책’ 브랜드 정착을 위하여 2022년 사업주제에 적합한 등(燈) 콘텐츠 전시

나. 한지예술 등(燈)작품 및 빛조각 신규제작 및 보수, 설치, 철거, 보관 등

다. 「2022 노원달빛산책」 현장 디스플레이 및 전시환경 조성과 관련된 제반 업무

6. 과업예산: 금110,000,000원(금일억일천만원 / 부가가치세 포함)

7. 대상 업무 관련 사업 현황 (「2022 노원달빛산책」사업의 주요 내용)

○ 추진 목적

－ 코로나19에 대한 방역 및 사회적 거리두기를 고려한 야외 힐링 전시를 추진하여 노원구만의 브랜드인

「2022 노원달빛산책」을 개최하여 워킹 스루형 전시로 안전한 문화행사 제공

－ 당현천 2km(중계역 당현3교 ~ 상계역 수학문화관) 내외 구간 및 북서울미술관, 중랑천 삼거리에

‘은하수를 건너서’라는 테마를 담은 예술 등(燈), 빛조각, 뉴미디어 콘텐츠를 제작 및 설치, 운영하여

안전한 거리두기 야외 관람형 전시행사를 제공해 노원구의 문화적 브랜드 가치 제고

－ 「2022 노원달빛산책」 콘텐츠 및 다양한 프로그램을 통한 노원구로의 관광객 유입 및 재방문 확대 도모

○ 축제 개요

－ 행 사 명 : 2022 노원달빛산책(구 노원등(燈)축제)

－ 행사기간 : 2022. 10. 07.(금) ∼ 10. 30.(일), 24일간(예정)

－ 행사구간 : 당현천 2km(중계역 당현3교 ~ 상계역 수학문화관) 및 북서울미술관/중랑천 삼거리(예정)

※ 기간 및 구간은 상황에 따라 일부 변동 가능

－ 주최/주관 : (재)노원문화재단

－ 예상관객 : 국내·외 참관객 20만명(예상)

－ 주요내용 : 한지예술 등(燈)작품 및 빛조각 전시, 테마별 구성, 부대행사(시민참여프로그램, 심포지엄) 등

○ 주요 추진방향

－ 노원구의 예술 콘텐츠, 예술축제로서의 독자성과 지명도를 공고히 하는 전시 기획

－ 코로나19 방역, 방문객 안전, 편의시설 강화를 통해 안전한 「2022 노원달빛산책」 운영

－ 특별 및 초대 작가전(테마에 맞는 작품을 제작 및 제공할 수 있는 전문작가 섭외) 운영

－ 시민참여프로그램, 심포지엄 등 운영(시민 도슨트, 체험 프로그램, 작가와의 대화)

－ 아카이빙 프로그램 운영(심포지엄, 도록 및 결과보고서 발간, 축제 홈페이지 제작 및 운영 등)

Ⅱ		과업 내용

1. 과업내용

구분	주요 내용	비고
연출 · 기획	◦ 축제 연출 - 2022년 사업주제에 맞는 기획 및 연출, 구간별 테마 선정 - 주제 및 구간별 테마에 적합한 행사구간 설정 및 등(燈) 전시 - 관람객의 안전과 흥미 제고를 위한 전시 기획 및 동선 수립	※ 세부실행계획은 추후 별도 수립 후에 발주기관 승인 필요
	◦ 한지 등(燈) 제작 및 전시 - 한지 등(燈) 제작계획(수량, 종류, 신규 디자인) 수립 - 신규 등(燈)작품을 최소 8개 작품 20여점(點) 이상 제작 ◦ 뉴미디어 소재 등(燈) 전시 - LED, 뉴미디어 등 다양한 소재를 활용한 작품 전시계획 수립 ◦ 등(燈) 작품의 설치 및 철거 - 한지/기타 소재 등(燈)작품의 제작과 함께, 임대, 보수, 설치 및 철거 진행(사전에 발주기관에 진행 일정 보고, 필수) - 작품에 적합한 제반 환경 조성, 설치 및 철수 진행 - 전기 등 안전사고 예방을 최우선으로 진행	※ 한지 등(燈) 50% 이상 전시 추진
기타	◦ 관람객의 안전을 위한 콘텐츠 디스플레이 및 운영, 관리 ◦ 대형 등(燈) 제작 최소수량 4개 이상 제작

※ 과업 내용은 추진상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 상호 합의를 원칙으로 함

※ 위 표는 대략적인 과업 내용에 대한 요약본이며, 후술하는 세부 과업 내용을 참고

2. 과업의 세부지침

가. 축제 및 전시 등(燈) 제작 기획 및 배치에 관한 사항

1) ‘달빛산책’ 브랜드 안착을 위하여 적합한 축제 주제 및 구간별 테마 선정

- ‘2022 노원달빛산책’ 주제: ‘은하수를 건너서’

2) 관람객 동선에 따라 등(燈)작품 및 콘텐츠를 배치

3) 등(燈) 배치 및 관람객 동선 수립 시 관람객의 안전을 최우선으로 하여야 함

나. 한지예술 등(燈) / 빛조각 제작·보수에 관한 사항

1) ‘노원달빛산책’의 2022년 주제 등(燈)작품 및 빛조각 콘텐츠 제작

- 주제 등(燈)작품은 당현3교~수학문화관 사이에 설치하며 대형으로 제작

- 일부 작품은 북서울미술관 야외공간 및 중랑천 삼거리에 설치할 수 있음

※ 대형 작품 : 폭/높이 3~5m 안팎의 한지로 마감된 조형물(골조, 전기 설비, 좌대 포함)

2) 구간별, 테마별 등(燈)작품 선정 및 제안, 제작 및 설치

- 계약상대자는 기획한 구간에 따라 각 구간 주제에 맞는 등(燈)작품을 설치

- 설치되는 등(燈)의 수량은 8개 신규작품 20여점(點) 이상으로 함(주제 등(燈) 포함)

※ 전체 조형물의 수는 100점(點) 이상 설치 필요

- 전시 등(燈)자굼 및 빛조각의 수량 및 구성은 발주기관과 합의해 조정 가능함

- 자치구, 타 지자체, 유관기관 보유 등(燈)작품 출품 시, 임차 및 보수 작업 필수

구분		주요 내용
철골작업	발청 방지	- 발청(녹스는 것)을 방지하기 위한 아연도금 철사 사용 - 그외 철재는 발청 방지도료로 도색된 재료 사용 - 재료의 가공(절단, 용접)후 가공부위에 발청 방지도료 도색
	철골작업	- 외부로 투영되는 등(燈) 철선 라인의 심미성을 살린 철골 작업
	등(燈) 분리	- 보관 및 운반을 위한 등(燈) 분리 작업 일체 - 등(燈) 조형미 감안하여 작업 - 분리·조립 시 쉽도록 분리
전기시설	전구 설치	- 전력 소모량을 낮추기 위한 삼파장(절전형) 전구 사용 (방수가 가능한 전구 활용)
	절연작업	- 우천 시, 누전 예방을 위한 작품 내부 전기배선 작업 실시
	전구 고정	- 이동이나 보관 시, 전구의 파손을 막기 위한 전구 고정 작업
	안전대책 및 공급방법	IP 국제규격(IP 67급 이상)에 맞는 실외용 전구 사용(방수소켓 IP44 이상, 2중 피복선 사용) ※등작품 및 빛조각 현장 설치 시, 전기 담당자와의 사전협의 및 지시에 따른 전기설비 설치, 필요하면 작품별 접지 케이블 사용 - 적정 전기용량 설치 및 철거(예상 전기용량 약 1,500kw) ※자가발전설비 활용: 발전기, 발전차 등 ※전기설비 설치 후 안전진단(한국전기안정공사 등)을 필하며 전력 비상 상황 대비 예비발전기 준비 - 안정적인 전기 공급 및 안전대책 수립 - 전기기술자 상시 대기 및 전반적 관리․감독
한지 마감	마감지 선택	- 전구 빛의 투과 정도 및 광택 정도 고려한 마감지 선택(한지 사용) ※기존 등(燈)의 경우, 부분 철거 후 부분 보수 필요
	마감지 작업	- 물(수분)과 온도 변화에 강한 재료를 사용하여 마감지 부착 - 마감지 재단면이 깨끗하고 깔끔하도록 절단 마감 작업 수행
채색 작업	염료 선택	- 물(수분) 및 온도 변화에 강한 염료 선택(기존 등(燈)의 경우 곰팡이 제거)
	채색 작업	- 작품 주제 및 디자인에 적합한 채색 작업(기존 등(燈)의 경우 덧칠 필요)
마감작업	코팅	- 물(수분)과 온도 변화에 의한 변질 예방하기 위해 코팅 작업 필수
	조립	- 작품 조립 부분의 마감 작업
	하부	- 작품 설치 후, 하부 철골 및 전선 등 노출되는 부위에 대한 마감 작업 ※행사장 주위 환경에 맞추어 다양한 소재로 마감 작업 진행

※ 계약상대자는 기획내용에 따라 상기 내용에 준하는 자재, 작업방식을 제안할 수 있으나, 상기 안전 기준에 부적합한 자재 혹은 작업방식이 발견될 시, 계약 이후라도 중대한 계약위반사항으로 간주

다. 기타 조형물 설치에 관한 사항

1) 한지 예술등(燈) 작품과 함께, 뉴미디어 콘텐츠 등 조형물 제안 및 제작, 임대, 보수, 설치, 철거

- 주제 및 구간별 테마를 잘 나타내고 관람객의 흥미를 제고할 수 있도록 제안

2) 축제 사용 안내물(사인물) 제작은 발주기관 및 운영 용역사와 협의

라. 등(燈)작품의 설치·철거·보관에 관한 사항

1) 등(燈) 설치 시, 좌대 설치

- 축제 행사장에 등(燈)을 설치할 때는 반드시 좌대(당현천 바닥으로부터 적정한 거리를 이격시킨 사각대)를 설치하여 등(燈)을 배치해야 함

- 좌대는 축제 주제와 등(燈) 크기에 적합한 통일성 있는 제품으로 설치하며, 가리개(Cover)를 씌워 깔끔하게 마감

- 좌대를 철골 제품으로 제작(구입)할 경우, 등(燈)과 좌대 사이에 절연장치 마련

- 당현천 수질 오염을 유발할 수 있는 재질의 좌대는, 설치 불가

- 좌대 설치 시, 관람객 관람 시선 및 동선, 등(燈) 간의 적정한 거리를 유지 후 설치하며, 재해(돌풍, 우박, 범람 등)에 대한 대비 필수

- 기존 좌대 노후가 심하여 사용할 수 없는 경우, 신규제작 필수

2) 개장(개막) 전까지 점등할 수 있도록 설치 완료

- 모든 등(燈) 및 콘텐츠는 2022년 9월 26일(월)부터 개장(개막) 3일 전까지는 점등할 수 있도록 하며, 안전에 문제가 없는 상태로 설치해야 함

- 강풍 등에 따른 파손 예방을 위한 고정 장치(트러스 등) 설치

- 기존 시설물(분수대, 수목, 교량 및 교각 등)에 피해가 없도록 설치
(발주기관 사전협의 필요)

- 등(燈) 설치 시, 관객 동선, 당현천 지형을 고려하여 등(燈) 정면 방향 결정

3) 행사 종료 후 철거 완료(5일 이내)

- 등(燈), 트러스, 작품 안내판 등 행사를 위해 예술감독의 지시로 설치 및 사용된 작품환경 조성 물품 일체 철수, 철거, 전체 행사장소 원상복구

- 축제 구간 내 오물 제거 및 시설물(분수대, 수목, 시각예술 전시물 등) 훼손 시 원상복구

마. 등(燈)과 관련된 소유권에 관한 사항

1) 축제에 전시된 모든 등(燈)과 기타 조형물, 좌대의 소유권은 계약상대자에게 있으며 축제가 종료된 이후 전시품을 임차하거나 재사용할 수 있는 우선적 권리를 가짐

- 저작물에 대한 행사기간 중 사용권은 노원문화재단에게 있으며, 타 축제(행사)에 사용 시 재단과 협의를 거친 후 사용함을 원칙으로 함

- 주제 등(燈)작품 한정, 타 축제(행사)와 계약에 따른 수익 발생 시 일정 금액을 노원문화재단에게 기부할 수 있음

2) 2022년 노원달빛산책 전시를 위해 신규 제작된 등(燈)은 과업 종료 시점부터 5년간 발주기관에서 주최하는 ‘노원달빛산책(노원등축제)’ 관련 행사에 별도의 임대 비용 없이 전시 가능함. (보수, 설치, 철거 비용은 재단에서 부담)

3) 계약상대자는 신규제작 등(燈)작품과 조형물을 과업 종료 후 5년간 재단에서 주최하는 ‘노원달빛산책(노원등축제)’ 관련 행사에 타 축제(행사)보다 우선하여 제공해야 함

바. 등(燈) 설치 및 행사 일정에 관한 사항

1) 추진 일정(안)

구분	설치 및 점검 (현장합동점검)	시범 점등 기간	행사 기간	철거 및 원상복구
일정	2022.09.26.(월) ~ 2022.10.5.(수)	2022.10.6.(목) [17:00~20:00]	2022.10.7.(금) ~ 2022.10.30.(일) [18:00~22:00]	2022.10.31.(월) ~ 2022.11.11.(금)

※ 상기 일정은 축제 세부 계획변경, 노원구청 일정, 수도권 사회적 거리두기 단계 조정 등에 따라 변경될 수 있음

2) 현장 설치 작업은 인근 교통상황, 유동 인구 등을 고려하여 야간 활용 불가피

Ⅲ		과업수행 일반지침

1. 일반사항

가. 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

나. 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

다. 과업내용서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

라. 본 과업완료 후에도 경미한 추가작업이 필요한 경우, 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

마. 정당한 이유 없이 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

바. 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서, 과업지시서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

사. 본 용역의 수행 중 계획내용의 추가 수정, 변경 검토 등의 검토사항에 대해여 발주기관의 요구사항이 있을 시, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

아. 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

자. 계약상대자는 본 축제에 사용되는 등(燈) 작품 및 디자인 등이 지적재산권 유관 법률에 적합하도록 구성하고, 지적재산권 분쟁 시 발생 된 손해배상 및 청구금액은 계약상대자가 일괄 비용을 부담한다.

차. 안전을 최우선적으로 고려하여야 하며, 디자인 및 작품에 대한 저작권, 기존 시설물들의 파손 및 훼손이 있을 경우 계약상대자가 원상 복구함을 원칙으로 하되, 이와 관련한 분쟁이 발생하였을 경우 모든 책임은 계약상대자가 진다.

카. 등(燈) 작품 전시에 따른 작품별 대물보험 가입 필수(사전 보험 가입 확인증 제출)

타. 본 과업지시서의 용어 해석상에 차이가 있을 경우에는 상호 협의 하여 결정하여야 하며, 이견 발생 시 계약발주처의 의견을 우선한다.

2. 안전 및 보안대책

가. 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없으며, 사전승인 없이는 제3자에게 제공 또는 대여할 수 없다.

나. 계약상대자는 발주기관의 서면동의 없이 본 계약상의 권리 혹은 의무를 제3자에게 양도, 이전할 수 없다.

다. 계약상대자는 본인의 업무결과물이 모방하거나 도용한 것이 아니며, 제3자의 저작권 등의 지적재산권 및 초상권을 침해하지 않았음을 보증한다.

라. 기타 보안과 관련되는 사항은 발주기관의 별도 지침을 따라야 한다.

3. 과업의 착수 및 보고

가. 본 과업은 계약체결 후 10일 이내에 과업에 착수하여야 한다. 다만 계약 당사자 간에 별도로 정한 경우, 그에 따른다.

나. 과업 수행 계획서에는 일정, 과업참여자 명단, 수행방법, 보완각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부하여 착수(공)계를 제출하여야 한다.

4. 수행 인력의 구성 관련

가. 본 축제 계약상대자는 본 과업수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문 인력을 충분히 확보하여 본 과업의 목적을 달성하도록 한다.

나. 과업수행 용역 업무를 수행함에 있어 노원문화재단이 부적절하다고 판단하는 인력에 대해서는 교체를 명할 수 있으며, 본 축제 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

다. 과업수행 중 과업수행계획서에 명시된 과업책임자 혹은 참여 인력을 교체하고자 할 때는 사전에 노원문화재단 측의 확인을 받아야 한다.

5. 저작권 등에 관한 사항

가. 본 과업과 관련해 제작된 모든 성과물의 우선 사용권은 노원문화재단에게 있다.

나. 노원문화재단은 용역과 관련된 모든 성과물을 지역문화 발전을 위하여 홍보, 교육자료, 출판, 전시 등을 위해 사용할 수 있다.

다. 본 과업 수행에 있어 제3자의 저작권을 침해해서는 안되며, 저작물의 판권, 저작 인격권 등에 대한 문제가 발생할 경우, 이에 대한 모든 책임은 본 축제 계약상대자가 진다.

라. 본 축제 계약상대자는 본 축제의 홍보에 필요한 사진 및 동영상 등의 자료 제공에 적극 협조하여야 한다.

6. 용역 계약의 조정 및 해지

가. 다음 사유가 발생하였을 경우, 양측간에 협의하여 용역기간을 조정할 수 있다.

- 과업수행 중 노원문화재단의 요구가 있을 때

- 천재지변 및 불가항력적인 사유가 발생하였을 때

- 노원문화재단의 사정에 의한 행정 절차상 용역 기간이 추가 소요되었을 때

나. 다음 각 호에 해당하는 경우, 당해 계약의 전부 또는 일부를 계약 해제 또는 해지할 수 있으며, 이 경우 본 축제 계약상대자는 손해배상 등 민·형사상 일체의 요구를 할 수 없다.

- 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 않을 경우

- 계약서상의 과업수행 기간 이내에 과업을 완료하지 못하거나 본 축제 계약상대자의 명백한 귀책사유로 인해 과업을 완료할 가능성이 없다고 인정되는 경우

- 업체 선정 시 제출한 제안서의 내용과 실제 과업수행내용, 회사 소개 내용 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 노원문화재단의 사전승인 없이 과업 내용을 변경하는 경우

- 기타 과업수행에 있어 노원문화재단의 정당한 요구사항을 이행하지 않을 경우

- 노원문화재단 혹은 노원구청의 사정에 따라, 본 축제를 진행할 수 없다고 판단될

경우, 양측간 협의에 따라 본 계약에 대하여 해지할 수 있다.

7. 사업비 정산 등 회계 처리

가. 예산 집행은 세부실행계획서의 예산계획에 의하여 집행한다.

- 사업계획의 변경이 불가피한 경우에는 사전에 노원문화재단의 승인을 받아야 한다.

- 사업 완료 시점에서의 예산계획 변경은 가급적 자제한다.

나. 회계 관련 증빙서는 세제 관련 법령에 의거 원칙적으로 다음 구분에 따라 발급자가 적법하게 발급한 세금계산서 등을 첨부하도록 한다.

- 일반과세자 : 세금계산서, 신용카드 매출 전표, 현금영수증 등

다. 정산서 관련 제출서류는 아래와 같이 제출한다.

- 사업비 세부 집행 내역(일반관리비, 대행수수료, 부가가치세 포함)

- 증빙자료(영수증, 계약서, 내역서 등) 원본 및 회계 장부 사본
(영수증 복사본에 원본 대조필을 날인하여 제출할 수 있다.)

라. 사업비의 정산은 당초 계약체결 금액으로 정산하며, 총액을 초과한 소요금액에 대하여 노원문화재단은 지급하지 않는다.

마. 본 축제 계약상대자는 사업비를 노원문화재단이 정하는 목적과 용도에 따라 집행하여야 한다.

바. 본 축제 계약상대자는 별도의 통장을 개설하여 입·출금 내역을 확인 가능토록 하며, 회계 책임자를 지정하여 보고 및 운영하고, 예산 집행은 세금계산서, 법인신용카드, 은행입금증(무통장입금) 등의 방법으로 하며 특별한 경우 외에는 현금지출을 할 수 없다.

사. 본 축제 계약상대자는 출연료 및 유급인력 등 인건비 지출 시에는 관계 규정에 의거 원천징수를 하고 세무관서에 신고(납부)하여야 한다.

아. 본 축제 계약상대자는 본 사업을 담당하는 상근직원에 대하여는 본 축제 계약상대자에서 지급하는 임금 외에 행사비에서 별도의 인건비를 지급할 수 없다.

8. 대금 지불 관련

가. 노원문화재단은 납품 후 검수를 거쳐 문제가 없을 시애, 행사 종료 후에 본 축제 계약 상대자로부터 대금을 청구받은 날 기준 7일 이내에 지급한다.

(단, 상호 협의하여 10일 이내에서 연장 가능)

나. 본 과업수행 중 본 축제 계약상대자의 원활한 축제 운영 및 자금집행을 기하고자 할 경우, 노원문화재단은 선금급을 지급할 수 있다.(용역수행금액의 최대 50%)

9. 국내·외 관련 자료 수집 및 활용

가. 본 과업 수행 시 질적 향상을 위해 각 분야별 기본자료 및 보고서를 분석하고 또한, 국내·외 참고자료가 필요할 시에는 이를 수집, 분석하여 동 업무에 활용하는 방안을 검토한다.

10. 과업수행에 대한 운영관리 및 협조

가. 본 과업 수행을 위하여 관계기관과의 협조가 필요한 경우에는 노원문화재단의 협조를 요청할 수 있으며, 노원문화재단은 특별한 사유가 없는 한 이를 적극 지원한다.

나. 과업 성과물의 완성도 및 만족도를 높이기 위해 노원문화재단의 의견을 최대한 반영한다.

다. 과업 인력은 추진 일정에 따라 지정 일자 및 지정 장소에 정확히 도착하여야 하며 사전에 출발일시, 도착일시 등을 통보하여야 한다.

라. 모든 인력은 사전 보고한 인력에 충족되어야 하며 무단결근 및 인력이 본 과업과 다를 경우, 추후 정산 시 감액할 수 있다.

마. 견적서에 포함되지 않은 경미한 추가 사항은 발주처의 요구 시 계약상대자 측에서 부담한다.

바. 본 축제의 작품 설치 중 현장 안전관리 및 공간 구성에 대한 경호·경비를 담당한다.

11. 기타사항

가. 계약상대자는 축제에 사용되는 예술 등(燈) 및 빛조각 디자인 등이 저작권법에 적합하도록 구성하고, 저작권료가 발생할 시에는 계약자가 저작권료를 납부한다.

나. 과업 수행 중 노원문화재단의 계획변경 등 부득이한 사유 발생 시 과업을 변경할 수 있다.

다. 과업 수행 중 노원문화재단의 계획변경으로 과업의 내용이 변경된 경우 이에 상응하는 예산 및 과업 수행 기간을 변경할 수 있다.

라. 노원문화재단은 본 축제의 홍보, 기록보존 등을 위한 녹화 및 사진 촬영의 권리를 갖는다.

마. 노원문화재단이 지식재산권자에게 손해를 배상하였을 경우 계약상대자에게 구상권을 청구할 수 있다.

바. 과업수행 중 천재지변이나 바이러스 등 기타 불가항력적 장애요인으로 인하여 사회적 분위기가 축제의 시행에 적합하지 않다고 판단될 경우, 노원문화재단과 계약상대자가 서로 협의하여 축제를 연기 또는 취소 할 수 있다.

사. 천재지변 사유로 행사가 취소될 경우, 다음 각 호중 노원문화재단의 결정을 적극 수용한다.

- 개최 일정을 재지정하여 변경개최할 경우, 상호협의 하여 결정하나 노원문화재단의 결정을 수용한다.

- 천재지변으로 부득이하게 축제를 연기 또는 취소해야 할 경우, 양측간 합의해야 하며, 그 결과에 따라 축제를 연기 또는 취소할 수 있다.

- 특별한 사유 없이 노원문화재단 또는 계약대상자의 일방적 취소에 관련된 위약금은 상·관례에 따라 처리한다.

아. 분쟁으로 인한 소송 발생의 경우에는 노원문화재단의 소재지 관할 법원으로 한다.

Ⅳ		과업의 보고 및 성과품 제출

1. 과업 보고

가. 정기보고

1) 주간보고 : 수행실적, 차주 계획(소요시간, 완료 예정일), 문제점 등

- 매주 보고를 원칙으로 함

2) 월간보고

- 매월 말, 계약상대자 분야별 책임자 참여 합동 회의 개최

- 회의록 작성, 발주기관의 개선 요청결과에 관한 결과를 차주 주간보고 시 서면보고 시행

나. 단계별 보고

1) 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내 시행

- 착수보고는 발주기관 및 자치구 대상 보고를 원칙으로 함

- 보고형식은 PPT 및 한글 보조자료를 통해 계약상대자 PM이 직접 발표

2) 중간보고

- 행사 20일 전, 행사 운영 진행 상황 보고

- 행사 10일 전, 세부운영 매뉴얼 보고

3) 완료보고 : 과업 종료 시 전체 개발단계의 수행 결과 및 산출물 내역 보고

다. 현장 보고

1) 축제 현장 보고 : 축제개최일 ~ 축제종료일

- 매일 축제 종료 시, 계약상대자 PM에 의한 보고를 원칙으로 함

- 보고 시, 운영인력 현황, 등(燈) 상태 점검 현황, 전기안전 관리현황 등을 포함한 자료를 가지고 익일 오전 11시 구두보고를 실시하며(구두보고가 부득이하게 원활하지 않으면 서면 보고), 발주기관 관리자의 서명을 득해야 함

2) 긴급사항 보고 : 선조치 후보고 원칙으로 하되, 추후 발생 상황에 대한 진술서 및 사진 자료 등을 보고

2. 성과품 제출

가. 성과품: 행사결과보고서(발주처 지정 형식)

1) 과업 종료 시 전체 개발단계의 수행 결과 및 산출물 내역 보고

2) 사업비 정산내역서

3) 운영인력 현황 자료

4) 축제에 사용하기 위해 제작된 이미지 파일, 영상 파일 등 원본 제출

나. 제출기한: 계약종료일까지 발주처 승인이 완료되어야 함

다. 방  법: 완료계와 함께 공문으로 성과품 제출
[결과보고서 5부, 데이터 원본파일(USB 또는 외장HDD)]